금융위원회	보도자료

보도시점	2023. 8. 9.(수) 15:30	배포	2023. 8. 9.(수) 15:30

문화재 사업으로 7년간 지연된 ‘영주다목적댐’ 준공, 조정으로 해결

- 댐 준공되면 수변 관광사업, 도로개설 등 추진해 지역경제 활성화 기대

□ 문화재 이전·복원사업으로 7년간 지체된 영주다목적댐 준공이 국민권익위원회의 조정으로 가능해져 앞으로 댐 주변 개발사업이 원활히 진행될 전망이다.

국민권익위원회(위원장 김홍일, 이하 국민권익위)는 9일 한국수자원공사 영주댐지사에서 김홍일 위원장 주재로 현장조정회의를 개최하고 문화재 이전·복원사업비를 정산해 댐을 준공하도록 조정했다.

□ 영주다목적댐 건설*은 원활한 용수공급과 홍수피해 예방을 위해 2009년 착공해 2016년 댐 공사를 완료했다. 그러나 부속 사업인 문화재 이전·복원 사업비 정산이 지연되면서 7년간 댐 준공에 차질을 빚어 왔다.

* 영주다목적댐 총사업비 1조 1,030억 원(문화재 이전․복원 사업비: 312억 원)

댐 준공이 장기간 보류되면서 수변 관광사업, 도로개설사업 등 댐 주변 개발과 관련된 영주시의 8개 후속 숙원사업(사업비 3,809억 원) 추진이 어려워지자 영주시 주민 33,434명은 지난 2월 국민권익위에 집단민원을 제기했다.

□ 국민권익위는 수차례의 현장조사와 관계기관 협의를 거쳐 마련된 최종 조정안에 대해 주민들과 관계기관의 합의를 이끌어냈다.

국민권익위의 조정안에 따르면, 영주시와 한국수자원공사는 현재까지 추진된 문화재 이전·복원사업의 비용을 정산하고 후속 업무를 영주시에 이관하기로 했다.

환경부와 한국수자원공사는 사업비 정산이 완료되는 대로 댐 건설사업 준공 승인을 위한 행정절차를 이행하기로 했다.

경상북도와 영주시는 문화재 이전·복원이 차질없이 진행될 수 있도록 필요한 행정조치와 절차를 이행하기로 했다.

□ 국민권익위 김홍일 위원장은 “이번 조정으로 관계기관 간 문화재 이전·복원사업에 대한 비용이 정리돼 장기간 지연된 댐 사업 준공이 조속히 이뤄질 수 있게 되어 매우 다행이다.”라고 말했다.

이어 “영주다목적댐 준공으로 지역 숙원사업이 원활하게 추진돼 지역경제 활성화에 보탬이 되고 지역주민들의 불편도 해소되길 기대한다.”라고 말했다.

담당 부서	도시수자원민원과	책임자	과 장	김성훈	(044-200-7481)
		담당자	사무관	이명호	(044-200-7488)

붙임		영주다목적댐 관련 후속 숙원사업 (출처 : 영주시)

연번	사업명	사업비(억원)	사업 내용
1	영주댐 레포츠시설 조성사업	146	스카이 글라이더· 사이클, 암벽등반 등
2	영주댐 패러글라이딩 시설 조성사업	3	패러글라이딩 이·착륙시설
3	영주댐 수생태 국가정원 조성	1,200	친환경 수생태 국가정원
4	평은면 평은리 취수탑 설치 및 송배수관로 매설공사	18	취수탑 1식
5	문수면 만방리 취수탑설치 및 송배수관로 매설공사	24	취수탑 1식
6	이산면 질골지구 소규모 용수개발사업	58	양수장, 송수관로
7	국도대체 우회도로 (적동~상망) 건설	2,180	도로건설(L=9.4㎞)
8	영주댐 수변 관광 생태자원화단지 개발사업	180	데크 탐방로, 수상데크
합계		3,809